2	특 수 공 시

1. 합천군 육아종합지원센터 건립

2. 합천야구장 조성

3. 황강생명길 생태탐방로 조성

4. 합천시장 주차장 조성사업

5. 공공하수처리장 태양광발전장치 설치사업

6. 회전교차로 설치사업

7. 황매산 수목원 조성사업

8. 정원테마파크 조성

9. 합천 영상미디어센터 건립

10. 와리보건진료소 신축

합천군 육아종합지원센터 건립

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 합천읍 동서로 109

❍ 사업기간 : 2013. 5월 ~ 2015. 7월

❍ 건축면적 : 대지 1,728㎡, 연면적 825㎡

❍ 사 업 비 : 1,560백만원(국비500백만원 / 군비1,060백만원)

❍ 주요시설

- 1층 : 어린이도서관, 교육·프로그램실, 맘카페, 시간제보육실, 수유실

- 2층 : 영·유아 놀이체험실, 사무실

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년도 이후
계				1,260
국 비				500
도 비
군 비				760	517
기 타

그간 추진상황

□ 육아종합지원센터 설치 공모                  : 2013. 5. 16 ~ 5. 27

□ 심사․심의에 따른 설치지역통보              : 2013. 6. 24

□ 실시설계용역                                 : 2014. 4. 10. ~ 7. 16    □ 착  공                                      : 2014. 9. 16

□ 설계변경                                    : 2014. 10. 17. ~ 12. 7

□ 어린이 도서관 및 영·유아 놀이체험실 제안서 공모    : 2015. 1. 16.

□ 어린이 도서관 및 영·유아 놀이체험실 착공    : 2015. 4. 1

□ 위탁운영업체 선정 심의                      : 2015. 4. 29.

□ 위·수탁 계약서 체결                          : 2015. 5. 26

기대효과

❍ 어린이집 경쟁력 강화 및 부모 육아능력 증진

❍ 지역 내 보육환경 개선으로 출산률 제고 및 인구유입 기대

외부전경

내부전경

합천야구장 조성

❍ 기반시설이 부족한 야구종목에 합천야구장 조성을 통하여 생활체육

저변 확대를 위한 토대를 마련

❍ 합천야구장 조성으로 동호인 야구대회 및 야구단 전지훈련 유치를

통하여 지역경제 활성화 도모

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 합천읍 영창리 898번지 일원

❍ 사업기간 : 2013. 2. 18 ~ 2015. 2. 13

❍ 사업규모 : 야구장 2면

- 내야(인조잔디) A=1,540㎡, 외야(마사토) 6,182㎡

- 주루 및 홈베이스 : 앙투카포장 183㎡

- 비구방지휀스 : 182m × 2면

❍ 총사업비 : 1,000백만원(기금 350 , 군비 650)

❍ 사업내용 : 야구장 2면, 이동식화장실, 기타 편의시설 설치

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년도 이후
계	1,000			1,000
국 비
도 비
군 비	650			650
기타(기금)	350			350

추진상황 및 계획

❍ 실시설계          : 2013. 05.

❍ 공사발주 및 착공  : 2014. 01.

❍ 공사 준공         : 2015. 02.

기대효과

❍ 지역주민 및 동호인 등 누구나 운동할 수 있는 편의시설 제공

❍ 생활체육 활성화로 군민 체력증진 기여

위치도

전경사진

황강생명길 생태탐방로 조성사업

❍ 황강을 따라 조성된 갈마산 등산로와 정양레포츠공원 간 단절된 구간을

연결하여 강․산․늪을 두루 아우르는 테마길을 조성함으로써 생태관광

인프라 구축 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함.

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 용주면 성산리 지내

❍ 사업기간 : 2014. 2. 10 ~ 2014. 12. 29

❍ 사업규모 : 생태탐방로 조성 L=0.5㎞

❍ 총사업비 : 300백만원(국비 150, 도비45, 군비 105)

❍ 사업내용 : 황토포장(L=440m B=2.5m), 목교설치(L=24m, B=2.5m),

수목식재 등

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년도 이후
계	300			300
국 비	150			150
도 비	45			45
군 비	105			105
기 타

추진상황 및 계획

❍ 실시설계 완료     : ‘14. 08월

❍ 공사발주 및 착공  : ‘14. 09월

❍ 공사 준공         : ‘14. 12월

기대효과

❍ 테마길 조성으로 탐방객들에게 자연생태 학습공간 제공

❍ 단절된 탐방로 정비로 생태관광 인프라 구축 및 시너지 효과

위치도

전경사진

합천시장 주차장 조성사업

❍ 전통시장을 이용객들이 시장 주변에 주차 공간이 없어 불편 호소

❍ 인근 부지를 확보 후 주차장 조성으로 이용객 편의 도모와 전통시장

활성화 기여

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 합천읍 합천리 475-5번지 외 29필지

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2015년

❍ 사 업 량 : 주차장 28면(872㎡), 화장실 1동

❍ 총사업비 : 1,393백만원(광특 656, 군비 737)

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2014년	2015년	2016년도 이후
계	1,393		1,214	179
국 비	656		656
도 비
군 비	737		558	179
기 타

추진상황 및 계획

❍ ‘11. 12월 : 합천시장 사전컨설팅 연구용역 실시(시장경영진흥원)

❍ ‘13. 10월 : 2014년 시설현대화사업(광특) 확정

❍ ‘13. 11월 : 군정조정위원회 개최(원안가결)

❍ ‘13. 12월 : 188회 합천군의회 임시회 의안 심의(원안가결)

❍ ‘14. 05월 : 감정평가 및 보상조서 작성

❍ ‘14. 06 ~ ’14. 10 : 보상협의 및 거주민 이사 등

❍ ‘14. 11 ~ ’15. 06 : 공사착공 및 준공

기대효과

❍ 시장 접근성 개선으로 이용객 편의제공 및 전통시장 활성화에 기여

위치도

현장사진

공공하수처리장 태양광발전장치 설치사업

❍ 신재생에너지(태양광) 설치를 통하여 전력 수요량 피크 시 부하

경감을 도모하고 전력비용 절감

❍ 신재생에너지 확대 보급으로 원유수입 대체효과, 이산화탄소 배출량

저감 등 녹색성장에 기여

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 합천읍 합천대로 2905 공공하수처리장 내

❍ 사업기간 : 2015. 3. 1 ~ 6. 30(3개월)

❍ 사 업 량 : 태양광 200㎾

❍ 총사업비 : 640백만원(국비 50%, 군비 50%)

투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2014년	2015년	2016년도 이후
계	640			640
국 비	320			320
도 비
군 비	320			320
기 타

추진상황 및 계획

❍ ‘14. 9월 : 2015년 신재생에너지 지역지원사업 확정

❍ ‘15. 3월 : 실시설계용역 및 입찰공고

❍ ‘15. 4월 : 공사 착공

❍ ‘15. 6월 : 공사 준공

기대효과

❍ 태양광 설치로 피크 시 부하 경감으로 전력요금 절감 효과

위치도

현장사진

회전교차로 설치사업

❍ 『회전교차로』 는 교차로 내부 원형교통섬을 중심으로 반시계방향으로

차량이 통과토록 함으로써 진·출입 차량 감속을 유도하여 교통사고 감소

❍ 교차로 통행 차량 및 보행자에 안전하고 원활한 교통편의 제공

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 일원

❍ 사업기간 : 2011년 ~ 2017년

❍ 사업개요 : 회전교차로 설치 10개소

❍ 총사업비 : 3,000백만원(국비 916 , 군비 2,084)

❍ 사업내용 : 회전교차로 10개소(준공:6개소, 공사중:1개소, 계획4개소)

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2014년	2015년	2016년도 이후
계	3,000	903	707	270	1,120
국 비	916	356			560
도 비
군 비	2,084	547	707	270	560
기 타

추진상황 및 계획

❍ 우체국앞 회전교차로 외 5개소 사업완료 : 2011년~2015년 2월

❍ 운동장앞 회전교차로 공사 착수 : ‘15. 07월

❍ 고품 회전교차로 실시설계 용역 : ‘15. 08월~10월

❍ 운동장앞 회전교차로 공사 완료 : ‘15. 10월

※ 부산지방국토관리청 시행 회전교차로 7개소 : 2014년~2017년

기대효과

❍ 교차로 통행 차량 및 보행자의 안전하고 쾌적한 도로환경 제공

❍ 교차로 신호대기로 인한 차량 정체시간 감소 및 교통소통 원활

위치도(고품 회전교차로)

전경사진(고품 회전교차로)

황매산 수목원 조성사업

❍ 수목자원을 수집ㆍ증식ㆍ보존ㆍ관리 및 전시하고, 황매산 지역의 고유한

향토 산림을 보존함으로 미래지향적 이용방향을 제시하여 국민에게 최상의

산림서비스를 제공

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 가회면 둔내리 산219-1번지 외 6필지

❍ 사업기간 : 2011 ~ 2017년(7년간)

❍ 사업규모 : 수목원 조성 1식(26.7ha)

❍ 총사업비 : 6,000백만원(국비 3,000 도비 900 군비 2,100)

❍ 사업내용 : 방문자센터, 관람로, 조경식재 외

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년도 이후
계	6,000	2,200	600	1,000	2,200
국 비	3,000	1,100	300	500	1,100
도 비	900	330	90	150	330
군 비	2,100	770	210	350	770

추진상황 및 계획

❍ ‘12. 03월 : 황매산 수목원 조성사업(총괄분) 시행

❍ ‘12. 04월 : 황매산 수목원 조성사업(1차분) 착수

❍ ‘12. 04월 : 황매산 수목원 조성사업(2차분) 시행

❍ ‘14. 04월 : 황매산 수목원 조성사업(3차분) 시행

❍ ‘15. 06월 : 황매산 수목원 조성사업(4차분) 시행

❍ ‘16. 04월 : 황매산 수목원 조성사업(5차분) 시행

기대효과

❍ 수목원 조성을 통한 천연자원의 보존

❍ 황매산 철쭉제와 연계한 사업개발로 관광인프라 구축

위치도

조감도(안)

정원테마파크 조성사업

❍ 주5일 근무제 도입에 따른 관광, 레저인구 증가로 영상테마파크와 연계한 체류형 관광체험시설 조성으로 관광산업 육성 도모

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 용주면 가호리 일원

❍ 사업기간 : 2009～2015(7년간)

❍ 조성면적 : 80,463㎡

❍ 사 업 량 : 방문자센터(청와대모형), 잔디마당, 한국정원, 편의시설 등

❍ 총사업비 : 15,300백만원(국비4,600, 군비7,500, 민자3,200)

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년도 이후
계	15,300	8,700	1,200	-	5,400
국 비	4,600	3,000	500	-	1,100
도 비	-	-	-	-	-
군 비	7,500	5,700	700	-	1,100
기 타	3,200	-	-	-	3,200

추진상황 및 계획

❍ 실시설계완료 및 공사 착공                : 2012. 06월

❍ 방문자센터 및 잔디마당 공사 완료         : 2015. 06월

❍ 전체공사 준공(예정)                          : 2015. 10월

기대효과

❍ 실제와 유사한 방문자센터(청와대모형) 조성으로 차별화된 관광명소 개발로 지역관광산업 육성 도모

위치도

전경사진

합천 영상미디어센터 건립사업

❍ 전국 최고의 시대물 오픈세트장으로 현재 촬영세트 시설물 관람의

단일테마를 넘어 복합적인 관광콘텐츠 개발 필요에 따라 지역주민

및 관람객에 다양한 영상문화 체험과 시네마테크 기능 중심의 전용

상영관을 건립하고자 함.

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 용주면 가호리 합천영상테마파크 일원

❍ 사업기간 : 2014 ~ 2015 (2년간)

❍ 사업규모 : 영상미디어센터 1동 건립

❍ 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,000, 도비 340, 군비 1,160)

❍ 사업내용 : 지상3층(연면적 974.83㎡), 관람석284석 및 부대시설 등

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2014년	2015년	2016년도 이후
계	2,500		1,000	1,500
국 비	1,000		200	800
도 비	340		100	240
군 비	1,160		700	460
기 타

추진상황 및 계획

❍ 건축허가 완료                    : 2014. 11월

❍ 기본계획 및 실시설계 완료        : 2015. 02월

❍ 공사 착공                        : 2015. 05월

❍ 공사 준공 예정                   : 2015. 11월

기대효과

❍ 시대물 촬영세트의 단일테마를 넘어 복합적인 영상콘텐츠 개발

❍ 지역주민 및 관람객의 다양한 영상문화 체험 제공

위치도

전경사진

와리 보건진료소 신축사업

❍ 보건진료소 신설로 보건의료혜택이 취약한 주민들의 기본 의료서비스

욕구 해소

❍ 단순 진료 뿐 아니라 주민 휴식 및 건강증진에도 기여

사업개요

❍ 위    치 : 합천군 율곡면 와리 735-9

❍ 사업기간 : 2013. 01. 01 ~ 2014. 07. 25

❍ 사업규모 : 보건진료소 신축 1식 (철근콘크리트조 1층, 연면적 171.45㎡)

❍ 총사업비 : 321백만원(도비 265 , 군비 56)

❍ 사업내용 : 진료소 및 숙소 신축

투자현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	기투자	2013년	2014년	2015년도 이후
계	321	-	21	300	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	265	-	-	265	-
군 비	56	-	21	35	-
기 타	-	-	-	-	-

추진상황

❍ 편입부지 보상	: 2013. 01월

❍ 공사발주 및 착공	: 2014. 04월

❍ 공사 준공	: 2014. 07월

효   과

❍ 보건의료 사각지대 해소

❍ 주민들의 건강 증진 및 보호에 기여

위치도

전경사진